CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS – Contrato nº 26/2022 – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2022. Contratante: Câmara Municipal de Alfenas; Contratada: BL Edificações Eireli; Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de vigência por mais 90 dias e acréscimo de 50% no valor do Contrato nº 26/2022, com início em 13/04/2023 e término em 13/07/2023. Data da Assinatura: 13/04/2023. Assinaturas: Pela Contratante: José Carlos de Morais – Presidente; Pela Contratada: Luiz Roberto dos Santos.